DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.
1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:	 	ElmatPRO Services s.r.o.
			Ivanovce 79
913 05 Ivanovce
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., 
č. účtu: 2623725867/1100
IČO: 44286848
DIČ: SK 2022664369

1.2 Objednávateľ:	Obec Adamovské Kochanovce
			Adamovské Kochanovce 268
			913 05  Melčice-Lieskové
Bankové spojenie: Prima banka a.s., 
č. účtu: 0616896001/5600
IČO: 00311405
DIČ: SK 2021091325

2. Predmet dodatku

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo je vysporiadanie vzájomných vzťahov z dôvodu neplnenia predmetu zákazky zhotoviteľom v dojednanom termíne.   
Zhotoviteľ predložil nasledovnú cenovú ponuky CP002/2012:
				ks/hod/m/m3	EUR/ks	EUR bez DPH	EUR s DPH		
Výkopové práce,odvoz zeminy,zakopanie	 	 	 	30	28,5	855	1026		
Podsypový materiál(piesok)	 	 	 	5	23	115	138		
Krycia fólia(blesk)	 	 	550	0,11	60,5	72,6		
Pretlak pod cestou	 	 	8	15	120	144		
FXKVS63	 	 	 	8	3,247	25,976	31,1712		
CYKY 3Cx1,5	 	 	102	0,52	53,04	63,648		
GURO(svorkovnica)230/4A	 	17	28,82	489,94	587,928		
FeZn zemniaca pásovina	 	550	1,62	891	1069,2		
PHILIPS MALAGA(230V/70W)svietidlo	17	85	1445	1734		
ST260/60 stožiare obj.pozink	 	17	250	4250	5100		
poistková skrinka SPP2(1x10A)	 	1	47,1	47,1	56,52		
CYKY 4Bx16	 	 	550	7,61	4185,5	5022,6		
NAYY-J 4x16	 	 	7	5,35	37,45	44,94		
betónové kotvenie	 	 	17	45	765	918		
Montážne práce	 	 	160	15	2400	2880		
Celková suma:			,		15740,5	18888,6	EUR	

K dnešnému dňu bolo zhotoviteľovi vyplatená suma celkovo vo výške 14299,80 EUR.  Za jednotlivé položky podľa priloženej cenovej ponuky. 
Nevyplatená suma vo výške 4588,81 EUR za nedodaný materiál a nevykonané práce objednávateľ použije na nákup nedodaných 17 ks svietidiel PHILIPS MALAGA(230V/70W) a vyplatenie zostatku ceny za 17 ks ST260/60 pozinkovaných stožiarov.
Zhotoviteľ podpísaným dodatku za zaväzuje dokončiť dielo v plnom rozsahu bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu za ďalší dodaný materiál a prevedené montážne práce. 
Dokončením prác a inštaláciou materiálu zo strany obce sa považujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy za úplne splnené. 

3. Záverečné ustanovenia
Dodatok k zmluve o dielo sa vypracúva v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli. Zároveň prehlasujú, že táto dohoda je uzatvorená na základe ich slobodnej vôle, vážne, určite, zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 
V Adamovské Kochanovce  dňa 9.6.2013

					
Objednávateľ                                                                                                     Zhotoviteľ